실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2026-16

담당부서

작성자

운항본부 항행처

전인수 과장(032-741-6196)

isjeon@airport.kr

사 업 명

미래항공모빌리티 운영 플랫폼 구축

사업개요

및

추진경과

ㅇ 추진배경

- (국정과제) 31.「미래모빌리티와 ‘K-AI’ 시티 실현」선정

* (UAM 조기 상용화) 공공서비스 우선 상용화 이후 민간 상용화 추진, UAM 허브 구축 지원, AI 기반 교통관리 체계 고도화

- (로드맵) ‘28년 공공부문부터 UAM 초기 상용화 제시(정부)

- (항공안전) UAM 등 新비행체 운용을 위한 시스템 구축 제시

* 제4차 항공정책기본계획 : UAM 등 통합 교통관리 체계 구축 제시

항공안전혁신방안 : 공항 조류 퇴치 드론 계획 제시→관리체계 필요

ㅇ 추진기간 : 2026.8. ∼ 2031.12. (65개월)

* 설계 : 2026.8 ∼ 2027.7 / 구축 : 2027.12 ∼ 2031.12.

ㅇ 총사업비 : 26,400백만원 (설계 1,300 + 구축 25,100)

ㅇ 주요내용 : 미래항공모빌리티(AAM) 운영플랫폼 구축

구축 개요	1. UAM 교통관리 지원 2. 버티포트 운영관리 지원 3. 운영 최적화 기술 도입 4. 시뮬레이션·훈련 5. 목표모델 구현
주요 과업	기본설계	세부 추진전략 수립 운영개념설계 아키텍처 및 운영 프로세스 설계 데이터 확보 및 연계방안 도출 AI·빅데이터 적용 및 AX/DX 전략 도출 UAM 비행절차 설계 운영센터 설계 RFP 도출 및 사업계획 구체화
	1단계 구축 (기본기능)	1단계 상세설계 핵심 모듈 개발 분야별 기본 기능 개발 운영·검증환경 구축 시뮬레이션 및 검증 부분준공 및 시범운영 1단계 성능적합증명
	2단계 구축 (상세화)	2단계 상세설계 상세기능 개발 AI 적용 고도화 운영센터 구축 기능 및 성능 검증 운영 데이터 기반 개선 본격 상용화 준비 2단계 성능적합증명

ㅇ 추진경과

- ’24.1.～10. : 인천공항 미래항공모빌리티 교통관리시스템 구축방안 수립 용역

- ’24.7. : 公社 비전2040 「미래형 교통망 혁신」

- ’25.9. : 미래항공모빌리티 운영 플랫폼 구축 예비타당성조사

- ’25.10. : 미래항공모빌리티 운영 플랫폼 구축 투자심의

- ’25.12. : 인천공항 미래항공모빌리티 추진전략 개정

- ’26.2. : 미래항공모빌리티 운영 플랫폼 기본설계 원가산정

- ’26.3. : 미래항공모빌리티 운영 플랫폼 기본설계 정보화 과업심의

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	수행기간	담당업무
본부장	조용수	’26.1 ∼	운항본부 업무 총괄
처장	윤민호	’26.1 ∼	항행처 업무총괄
팀장	이정환	’26.1 ∼	사업 추진 총괄
과장	전인수	’26.1 ∼	사업 실무 담당

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 인허가

국토교통부 도심항공교통정책과, 서울지방항공청

추진실적

-