실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2026-02

담당부서

작성자

운영본부 교통서비스처

안창범 대리(032-741-6281)

anan@airport.kr

사 업 명

T1 하늘공원 주차장 조성공사

사업개요

및

추진경과

ㅇ 추진배경 : T1 주차장 만성 혼잡 문제에 대한 근본적 해결책 마련 및 향후 주변 개발여건에 선제적 대응

ㅇ 추진기간 : 2019.6.5. ~ 2028.6.5.

ㅇ 총사업비 : 22,512백만원(태양광 제외)

ㅇ 주요내용

- 1활주로 남단 유휴부지 內 주차장 3,898면(A=130,170m2) 신규조성

ㅇ 추진경과

- 2019.12. 9. : T1 예비주차장 조성계획 수립

- 2020. 5.21. : 실시설계용역 계약 체결

- 2021. 8.31. : 실시설계용역 준공

* 유사등화 문제로 사업 추진 보류

- 2025. 4. 4. : 유사등화 위험도평가 면제기준 수립(서항청)

- 2025. 6.25. : T1 하늘정원 주차장 조성계획 수립

- 2026. 1.21. : 실시설계 변경용역 입찰공고

* 설계도서 현횅화 및 법령 개정 사항 반영

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업 관련자 <예시>

구분	성명	수행기간	담당업무
본부장	백정선	’19.7 ∼ ’21.9	운영본부 업무 총괄
본부장	전형욱	’21.9 ∼ ’21.11	운영본부 업무 총괄
본부장	류진형	’21.11 ∼ ’23.12	운영본부 업무 총괄
본부장	유구종	’23.12 ∼ ’24.7	운영본부 업무 총괄
본부장 직무대행	김홍수	’24.8 ∼ ’24.12	운영본부 업무 총괄
본부장	김창규	’25.1 ∼ 현재	운영본부 업무 총괄
처장	이상욱	’19.1 ∼ ’21.12	교통서비스처 업무 총괄
처장	조우호	’22.1 ∼ ’23.12	교통서비스처 업무 총괄
처장	박정열	’24.1 ∼ 현재	교통서비스처 업무 총괄
팀장	이연근	’20.1 ∼ ’21.6	사업 추진 총괄
팀장	김성수	’21.7 ∼ ’22.12	사업 추진 총괄
팀장	박용남	’23.1 ∼ ’24.5	사업 추진 총괄
팀장	최웅식	’24.7 ∼ 현재	사업 추진 총괄
차장	김용욱	’20.1 ∼ ’22.1	사업 실무 담당
과장	손의권	’20.1 ∼ ’25.1	사업 실무 담당
대리	고석우	’25.8 ∼ 현재	사업 실무 담당
대리	안창범	’26.2 ∼ 현재	사업 실무 담당

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 인허가 : 서울지방항공청 공항시설과

ㅇ 설계사 : ㈜한국종합기술 컨소시엄,

㈜도화엔지니어링 컨소시엄

추진실적

ㅇ ’26.3월 : 실시설계 변경용역 계약 체결 및 착수